공약연번	원도심 일대 근대 문화역사‘지붕없는박물관’브랜드화		담당부서
122
			도시문화재과

	최종목표
목포의 역사와 문화를 간직하고 근대건축자산이 많아 ‘지붕없는 박물관’으로 불리는 유달, 만호동 일대를 보존하고 재생 활성화하여 명품공간 조성

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	60%	총사업비	50,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. (※ 실제 사업 추진 2021. ~ 2025.)

○ 위    치 : 만호 ‧ 유달동 일대 근대역사문화공간

○ 사 업 량 : 면적 114,038㎡

○ 사업내용 : 우수 근대건축자산 매입 및 보수, 활용, 가로경관 개선, 관광자원화 추진(전시 및 체험공간 등 콘텐츠 구축)

○ 사 업 비 : 총 50,000백만원(국비 25,000, 도비 10,000, 시비 15,000)

☐ 추진현황

○ 근대역사문화공간 재생 활성화 추진 전략 기반 조성

-「목포 근대역사문화공간 보전 및 활용에 관한 조례」제정 (‵19. 10.)

- 목포 근대역사문화공간 종합정비계획 수립 완료 (‵21. 6.)

- 목포 근대문화자산 아카이브 구축 및 정밀실측 완료 (‵21. 12.)

○ 근대건축자산 정비 및 경관회복 사업 추진

- 목포 근대역사문화공간 내 우수 근대건축자산 10개소 매입 및 보수 (‵23. 8.)

· 구 호남은행 목포지점(등록문화재), 갑자옥모자점 등

- 경관회복 지중화 공사

· 1차분 : 구 목포공립심상소학교 강당 100m, 구 목포일본영사관 50m

· 2차분 : 갑자옥 사거리 ~ 목포천막사 200m (한전 착공 준비중)

- 역사성 보존 및 가로경관 정비 (‵22. 12.) : 오픈스페이스 조성(4개소)

· 민어거리 쉼터, 갑자옥 쉼터, 유달초 앞 쉼터, 국도1,2호선 기점공간 정비

· 목포진 초입 오픈스페이스 (추진중)

· 유달 ‧ 만호동 일원 골목길 정비사업 (추진중)

○ 근대문화유산 관광자원화

- 1차 매입 근대건축자산 활용 관광자원화 및 관광거점 역할

· 목포 대중음악의 전당, 목포모자아트갤러리1, 2관, 문화도시 꼼지락실험실 등 전시 및 체험 관광자원으로 활용

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	6	6	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	근대건축자산 보수‧활용 가로경관 정비	보수 및 활용 7건 가로경관 개선 3건	40%
2023	근대건축자산 보수‧활용 가로경관 정비	보수 및 활용 2건, 가로경관 개선 4건	60%
2024	가로경관 정비 브랜드 및 관광자원화		80%
2025	가로경관 정비 브랜드 및 관광자원화		90%
2026	브랜드 및 관광자원화		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	50,000	15,000	4,000	8,000	8,000	15,000
확보액	19,000	15,000	4,000	0	0	0
집행액	15,200	15,000	300	0	0	0

※ 국비예산 확보 여건에 따라 변경될 수 있음

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

- ‘지붕없는 박물관’ 브랜드화를 위한 종합 활용전략에 따라 사업을 추진하고 개발한 디자인(BI)을 적극 홍보 예정

☐ 향후계획

○ ‵23. 10. : 목포 근대역사문화공간 종합 활용전략 및 디자인(BI) 개발 용역 완료

○ ‵23. 10. ~ 12. : 근대건축자산 2차 매입(대상예정지 3개소)

○ ‵23. 10. ~ 12. : 근대역사문화공간 경관회복 사업 추진

번호	사 업 명	사업내용	추진현황(9월말)
1	근대건축자산 매입 및 보수	- 대상 : 2건 (등록문화재)	소유자 협의중
2	오픈스페이스(목포진 초입부) 조성	위치 : 중앙동1가 8(영란횟집 옆) 내용 : 안내 및 휴게공간	공사중
3	골목길 및 주요도로 담장 보수 정비	- 위치 : 유달, 만호동 내 - 내용 : 쾌적한 가로경관 조성	용역중
4	주요도로 및 건축물 경관조명 설치	- 위치 : 유달, 만호동 내 - 내용 : 야간경관 개선	계획중
5	도로 인접 건축물 입면 파사드 정비	- 위치 : 유달, 만호동 내 - 내용 : 쾌적한 가로경관 조성	계획중
6	편의시설(안내판, 화장실, 벤치 등) 조성	- 위치 : 유달, 만호동 내 - 내용 : 주민 편의 제공	공사중
7	소방 방재시설 구축	- 위치 : 유달, 만호동 내 - 내용 : 화재 등 재난 대비	계획중
8	지중화 공사 및 도로포장	- 위치 : 해안로229번길 200m - 내용 : 갑자옥~목포천막사 지중화	한국전력공사 일정 협의(11월 예정)

○ ‵24. ~ ‵25. : 근대역사문화공간 전시 및 체험공간 확충 및 관광자원화

※목차

담당부서		도시문화재과장 김재성 역사공간조성팀장 임진택 임진택 김형남(☎3542)