정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-03) 고하도 해식애 해안길 조성사업(완료)
② 추진배경	전남 서남권 해양 및 육상교통의 중심도시 위상에 맞는 관광인프라 구축
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 일원 ○ 사업규모 : 해상데크(L=738m B=2m), 광장 2개소 등 ○ 사 업 비 : 3,900백만원(도비 1,950, 시비 1,950)
④ 사업부서	목포시 관광과		⑤ 담당자	시설 7급 김승규 관광과장 정지숙
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업		⑦ 사업기간	2019 ~ 2021
<그간 주요 추진내용>
○ 준공 및 개통		‘21.08.26.	정지숙 과장 김만재 담당 김승규 실무관 시공사 : ㈜선일종합건설 김정연 감리사 : (주)장산엔지니어링 문수봉
○ 예비준공검사 실시		‘21.05.10	김선호 과장 김광호 담당 김승규 실무관 나창영 책임관 감리사 : (주)장산엔지니어링 문수봉
○ 공사현장 시민감사관 감사		‘21.05.07	김선호 과장 김광호 담당 김승규 실무관
○ 공사현장 목포시 감사실 기동감찰 실시		‘21.04.21	김선호 과장 김광호 담당 김승규 실무관
○ 해상인도교 상부구조물 설치		‘21. 1. ~4.	김선호 과장 김광호 담당 김승규 실무관 시공사 : ㈜선일종합건설 김정연 관 급 : 대영스틸산업 김형진
○ 해상강관파일 설치완료		‘20.11.15	김명준 과장 김광호 담당 김승규 실무관 시공사 : ㈜선일종합건설 김정연
○ 건설사업관리 용역 착수		‘20.06.18	김명준 과장 김광호 담당 김승규 실무관 용역사 : (주)장산엔지니어링 문수봉
○ 공사착공		‘20.05.19	김명준 과장 김광호 담당 김승규 실무관 시공사 : ㈜선일종합건설 김정연
○ 전라남도 계약심사		‘20.04.07	김명준 과장 김광호 담당 김승규 실무관
○ 추진현황 시의회 보고		‘20.03.09	김영숙 국장 김명준 과장 김광호 담당 김승규 실무관
○ 건설기술심의위원회 심의		‘20.03.04	김명준 과장 김광호 담당 김승규 실무관
○ 공법심의		‘20.02.17	김명준 과장 김광호 담당 김승규 실무관